"MISSIONE TECNICA PER IL PROGETTO SCUOLE 12 OTTOBRE"
" Campi Profughi Sahraui".
Rapporto di missione di Vinicio Ghilli
Responsabile Tecnico
Periodo:
28 ottobre / 30 novembre 2002
17 aprile / 17 giugno 2003
ISTITUZIONE
CENTRO NORD SUD
PISA

I componenti della missione Istituzione Centro Nord Sud:
Vinicio Ghilli, responsabile tecnico del progetto "Scuole 12 Ottobre"

OBIETTIVI DELLA MISSIONE:
- Verifica dello stato d'avanzamento lavori.
Ricerca di possibili risoluzioni operative per l'inizio ed il proseguimento delle fasi di lavoro precedentemente concordate. Incontro con il Ministro della Cooperazione Saharawi. Incontro con il Ministero del Lavoro.
Incontro con il Ministro della Sanità.
Incontro con il Direttore della scuola 12 ottobre. Esecuzione dei lavori.
Presa in carico della documentazione per gli acquisti fatti. Documentazione fotografica.

PERSONE INCONTRATE NEI CAMPI:
•	Salek Baba, Ministro della Cooperazione.
•	Salek Omar, 1 ° segretario del Ministero della Cooperazione, responsabile del Budget " Istituzione Centro Nord Sud "
•	Hamde Sidi Bachir segretario generale della Cooperazione
•	Omar Mansour, Ministro della Sanità.
•	Ada Brahim Hmamim, nuovo Direttore Protocollo Rabuni.
•	Mohamed Nafa, Ministro delle Costruzioni.
•	Ali Mahamud nuovo Direttore delle scuole 12 Ottobre
•	Hamdi Ali Braim nuovo coordinatore incaricato dalla Cooperazione
Relazione sulle attività svolte nel periodo 28 Ottobre / 30 Novembre:

Giunto a Rabuni ho preso contatto con il Direttore del Protocollo per programmare un incontro con i Ministri delle Costruzioni, della Cooperazione ed il Direttore della scuola 12 Ottobre. Durante questo incontro sono venuto a conoscenza che i lavori programmati in precedenza, non erano ancora iniziati e nonostante le loro ripetute scuse, ho espresso la mia totale disapprovazione, anche in nome dell'Istituzione Centro - Nord - Sud; ottengo comunque la promessa che al più presto mi saranno assegnati mezzi, materiali ed operai per poter iniziare i lavori. Pertanto eseguiamo diversi sopralluoghi alle scuole 12 Ottobre allo scopo di pianificare i programmi di lavoro.
Vengono risolti i problemi logistici riguardanti gli alloggi dei lavoratori, mezzi di trasporto, contenitore acqua dolce per impasti delle malte cementizie. Iniziamo a mettere livelli, quote ed a tracciare le fondazioni per i primi gruppi di bagni, per le fosse asettiche tricamerali e per le tubature d'evacuazione liquami. Giunge sul luogo anche una squadra di operai che iniziano a scavare manualmente le fondazioni in attesa dell'escavatore, ed a raccogliere pietre per la costruzione perimetrale dei terrapieni. Iniziamo le prime opere murarie per l'innalzamento del piano alla quota stabilita, i lavori procedono a rilento anche perché l'orario di lavoro non supera le cinque ore al giorno, chiedo ripetutamente altri operai o l'integrazione di una impresa algerina, ma non mi è stato concesso. Dopo questo mese di permanenza ritorno in Italia con la promessa del Ministro delle Costruzioni che in due mesi porterà a termine i lavori programmati.

Relazione sulle attività svolte nel periodo dal 17 Aprile al 17 Giugno
Prima di partire, eravamo già a conoscenza che i lavori erano stati interrotti poco dopo la mia partenza dai campi.
Effettuati nuovi incontri con la controparte, non restando assolutamente soddisfatto delle risposte ottenute ed essendo la fase di progetto "rifacimento bagni" una richiesta Governativa per emergenza sanitaria, mi sono rivolto al Ministro della Sanità, il quale riferisce ufficialmente queste inadempienze al Presidente Mohamed Abdel Aziz durante una riunione di Governo.
Alcuni giorni dopo abbiamo ricevuto i materiali occorrenti: blocchi in cemento, ghiaia, rete elettrosaldata, cemento, mattonelle e turche in ceramica, tubi zincati per l'impianto idrico, tubi in pvc per scarichi, legname per la costruzione di porte e finestre ed inoltre è stata potenziata la squadra di operai. Abbiamo iniziato pertanto a lavorare con continuità, eseguendo la costruzione dei primi due blocchi di bagni, delle fosse tricamerali, delle tubazioni di evacuazione liquami, e la costruzione di porte e finestre per i dormitori delle bambine.
Bagni
Lavori eseguiti:

Innalzamento del piano base
Costruzione dei bagni con blocchi in cemento
Posizionamento delle turche in ceramica
Rivestimento interno con mattonelle in ceramica altezza 60 cm. Lavandino centralizzato posto in ogni blocco di venti bagni Impianto idrico con cannella di prelievo acqua in ogni bagno Intonaci e tinteggiatura
Scale di accesso
Costruzione di tre fosse asettiche tricamerali
Tubazione di collegamento tra le asettiche e la fossa a dispersione.
In ogni blocco sarà posto un contenitore d'immondizia e in ogni bagno un secchio in pvc
Sui lati delle scale di ogni blocco saranno piantate due palme.
Il buon funzionamento, il buon uso e la buona manutenzione, potrà scongiurare il
ripetersi di malattie infettive ed epidemiche.
Dormitori delle bambine
Sono composti da n° 8 locali di 100 mq. Ciascuno, si presentano in condizioni fatiscenti, le finestre di misure irregolari sono protette da semplici tapparelle, lasciano passare un'enorme quantità di sabbia, durante le tempeste rendono l'aria interna irrespirabile e l'ambiente completamente buio, ( il generatore di corrente viene acceso solo per due ore alla sera) anche le lamiere poste sul tetto lasciano passare una discreta quantità di sabbia. Le facciate esterne e la pareti interne presentano distacchi dell'intonaco, i camminamenti in pietra sono molto dissestati ed il cortile e pieno di mucchi di sabbia e immondizia.

Lavori eseguiti:
Sostituzione di n°64 finestre costruite in legno, con trasparenti in plexiglas Sostituzione di n° 8 porte d'accesso in legno Effettuate riquadrature in cemento alle porte e alle finestre Ristrutturate le facciate esterne
Ristrutturati gli intonaci interni
Ristrutturati i camminamenti in pietra
Messo il telo in pvc sulle lamiere del tetto e coperto con la sabbia (sistema antisabbia usato nel luogo)
Tappeto in linoleum sul pavimento all'interno delle camere Tinteggiatura interna ed esterna
Plafoniera elettrica
Ripulitura del cortile con pala meccanica.

Lavori da eseguire con priorità

Ristrutturazione delle cucine Ristrutturazione del refettorio Ristrutturazione dormitori dei bambini Ristrutturazione delle aule Ristrutturazione bagni dei maestri Ristrutturazione ambulatorio e infermeria

Anche in questo periodo gli incontri con i Ministri della Cooperazione e delle Costruzioni si sono ripetuti con frequenza settimanale per continui aggiornamenti, di nuovo ottengo la promessa che i lavori di rifinitura continueranno regolarmente. Delego comunque come responsabile diretto dei lavori in mia assenza, il coordinatore del progetto Sig. Hamdi Ali Brahim con lettera alla controparte, (all. 1) il quale si impegna inoltre, a spedire per fax, le fatture e la rendicontazione dei costi dei lavori fino ad ora eseguiti, alla Direzione dell'Istituzione Centro Nord Sud.
La documentazione fotografica è in allegato al rapporto.